개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

옥과지역수요 맞춤형 공공주택사업

담당자

도시경제과 김나은(☎360-8562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 옥과면 KTC(산업용직류기기시험센터) 입주 등 저렴한 임대주택을 공급하여 젊은 청년새대 및 도시근로자의 인구유입이 절실히 필요하며 특히 옥과권역은 초·중·고·대학교가 위치하고 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 8.(3년)

○ 위 치 : 곡성군 옥과면 옥과리 236-4번지 일원

○ 규 모 : 9,837㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,000			1,000	17,000
국 비
시 도 비
시군구비	4,000			220	3,780
지 방 채
민간자본
기 타	14,000			780	13,220

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 곡성군, 한국토지주택공사 사업시행 협약체결 : 2018. 12.

○ 국토부 주택건설 사업 승인                  : 2020. 4.

○ 편입 대상 토지 소유자 설명회 개최          : 2020. 5.

○  감정평가 추진                             : 2020. 8. ~ 12.

□ 향후계획

○ 감정평가 및 용지매입 추진                  : 2021. 1. ~ 6.

○ 공공주택사업 착공                          : 2021. 7.

○ 공사 준공 및 공공임대 주택공급             : 2022. 8.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

곡성군 장애인체육센터 건립

담당자

주민복지과 이정미(☎360-8403)

주민복지과 김선희(☎360-8325)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인 생활체육참여 확대 및 장애인이 맘편히 운동할 수 있는 체육환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3. ~ 2022. 12.(4개년)

○ 위 치 : 곡성군 곡성읍 읍내리 254일원

○ 규 모 : 부지 1,188㎡, 건축연면적 2,180㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,325백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,325		14	280	6,031
국 비	3,000		14	280	2,706
시 도 비
시군구비	3,325				3,325

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30 %)

○ 2020. 05. 22. 공공건축 사업계획 사전검토 완료

○ 2020. 08. 07. 설계공모 심사위원 후보자 구성

○ 2020. 08. 14. 설계용역 발주에 대한 일상감사 완료

○ 2020. 08. 14. 공공건축 건축기획 심의 중

○ 2020. 08. 19. 전라남도 계약심사 심의 중

□ 향후계획

○ 2020. 09. 설계공모

○ 2020. 12. 실시설계 계약

○ 2021. 11. 공사착공

○ 2022. 11. 공사완료

□ 사업변경 내역

○ 2020. 08. 14. 문화체육관광부 사업변경 승인

○ 변경 승인 내역

구 분	당 초	변 경
사업기간	2019.3. ~ 2021.12.(3년)	2019.3. ~ 2022.12.(4년)
연 면 적	2,878㎡	2,180㎡
사업예산	6,043백만원	6,325백만원

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

정해박해 진원지 성지조성 건립

담당자

문화체육과 박진현(☎360-8253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역사적 사실인 정해박해를 테마로 한 종교관광지 조성사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023 (4개년)

○ 위 치 : 곡성성당(곡성읍 읍내리), 옹기 교우촌(곡성읍 승법리) 일원

○ 규 모 : 곡성성당 연면적 1,140㎡, 숭법리 대지면적 39,505㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	121,00			750	11,350
국 비	3,700		0	200	3,500
시 도 비	2,200		0	200	2,000
시군구비	5,600		0	300	5,300
지 방 채
민간자본	600		0	50	550
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정 투자심사(조건부 승인) : 2019. 06.

○ 2020년 국도비 확보(국비 2억, 도비 2억원) : 2020. 07.

□ 향후계획

○ 민간자본 확보 및 업무협약 체결(곡성군-곡성성당 협의각서) : 2020. 09.

○ 가마터 부지 발굴조사 실시(고증을 통한 역사성 확보) : 2020. 10. ~ 12.

□ 사업변경 내역

○ 당초 총사업비 : 121억

- 국비 37억, 도비 37억, 군비 37억, 민자 10억

○ 예상 총사업비 : 121억

- 국비 37억, 도비 22억(-15억), 군비 56억(+19억), 민자 6억(-4억)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

곡성마을정비형 공공주택사업

담당자

민원실 곽경택(☎360-8490)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 주택공급 해소 및 생활안정 기반시설 구축으로 사회 초년생, 청년 등 인구유입 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ∼ 2021년(3년)

○ 위 치

- 공공주택건설사업 : 곡성군 곡성읍 묘천리 44번지외 6필지

- 주변지역정비계획 : 곡성군 곡성읍 묘천리, 읍내리 일원

○ 규 모

- 공공주택 120호(국민임대 40호, 영구 30호, 행복 50호)

- 주변지역 정비계획

(세대공감뚝방생태놀이터 등 7개 HW / 생태관광 프로젝트 등 4개 SW)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 184백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,400		320	10,086	8,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,400		320	2,580	500
기 타	15,000			7,500	7,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사업시행 협약체결(곡성군↔LH) : 2019. 5. 27.

○ 계획변경(부지 및 규모 축소) 통보(곡성군↔LH) : 2020. 2. 21.

○ 마을정비형 공공주택사업 건설보조금 집행(2,586백만 원) : 2020. 6. 24.

□ 향후계획

○ 주택건설사업계획승인(국토교통부) 후 토지 보상 및 착공 : 2020. 12.

○ 사업완료 : 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 집단민원 발생에 따른 부지 및 사업규모 축소

- 곡성읍 묘천리 44 외 9필지 → 곡성읍 묘천리 44 외 6필지

- 공공주택 150세대 → 120세대

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

곡성 동악산 생태축(서식지) 복원사업

담당자

환경축산과 권호준(☎360-8331)

□ 사업목적 및 필요성

○ 곡성천은 동악산, 월봉습지, 섬진강을 연결하는 생태적 연결의 중심점에

위치하고 있으나, 도심 난개발로 인해 생태축 간의 연결기능이 단절

○ 자기치유 능력을 상실한 도시생태계 개선을 위한 생물서식지, 생태 숲

조성 등을 통해 생태축 복원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022

○ 위 치 : 전라남도 곡성군 곡성읍 읍내리, 오곡면 오지리 일원(곡성천)

○ 규 모 : 총 134,222㎡

- 생태습지, 생태통로, 생태숲, 생태관찰로, 생물서식지 등 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만 원(토지매입비 별도)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,800	0	0	857	8,943
국 비	6,860	0	0	600	6,260
시 도 비
시군구비	2,940	0	0	257	2,683

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 편입토지 보상협의 추진 : 2020. 5. ~ 2021. 6.

○ 기본·실시설계 착수 : 2020. 8. ~

□ 향후계획

○ 편입토지 보상협의 추진 : 2020. 5. ~ 2021. 6.

○ 기본·실시설계 착수 및 완료 : 2020. 8. ~ 2021. 6.

○ 공사 착공 및 준공 : 2021. 7. ~ 2022. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

오곡 다목적실내체육관 건립

담당자

문화체육과 오미진(☎360-8353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오곡면민의 실내체육관에 대한 수요 충족 및 지역 균형 발전 도모

○ 생활체육 활성화로 체력증진 기여 및 군민의 여가 활용공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2021. 2.

○ 위 치 : 곡성군 오곡면 오지리 943-1번지

○ 규 모 : 건물 1동(2층, 연면적 900㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,600		40	1,860	700
국 비	1,000		40	960
시 도 비
시군구비	1,600			900	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1.5%)

○ 재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인  : 2019. 11.

○ 기본 및 실시설계 용역                   : 2019. 11. ~ 2020. 8.

○ 오곡면 주민설명회 개최                  : 2020. 2.

○ 도 공공디자인 심의 완료                 : 2020. 5.

□ 향후계획

○ 도 계약 심사                            : 2020. 9.

○ 공사 착공 및 준공                       : 2020. 9. ~ 2021. 2.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

곡성체류형 복합문화공간 스테이션 1928

담당자

미래혁신과 박성애(☎360-8757)

□ 사업목적 및 필요성

□ 전남형 지역성장전략사업으로 공모 선정된 구)오곡초등학교 폐교 공간을 활용한 관계인구 체류형 플랫폼 구축

□ 교육, 체험, 거주, 커뮤니티가 결합된 복합공간 조성과 콘텐츠 운영으로 우리군 정주확산을 유도하기 위한 공유 거점공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 오곡면 오지리 1051-8번지 일원 (구)오곡초등학교

○ 규 모 : 부지면적 A=19,573㎡, 건축연면적 4,480㎡

- 숙박 25동, 커뮤니티공간 1동, 교육·체험공간 1동

- 프로그램(교육+체험+놀이) 및 운영 수익 콘텐츠 개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  11,996백만 원(도비 5,000 군비 6,996)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	11,996			1,400	10,596
국 비
시 도 비	5,000			1,000	4,000
시군구비	6,996			400	6,596

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

□ 대상부지 토지 및 건물 부지매입 완료 : ’18. 6.

□ 도 전남형 지역성장전략사업 공모사업 선정 : ’19. 9.

□ 도 지방재정투자심사 및 지방재정영향평가 : ’19. 10.

□ 도 사전컨설팅 : ’19. 12.

□ 업무 추진부서 이관 : ‘20. 1. (관광과 → 미래혁신과)

□ 기본구상수립 용역 추진 : ’20. 2. ~ 7.

- 사업추진 현황 및 기본구상안 전남도 협의 : ‘20. 6. 3.

□ 기본 및 실시설계용역 발주 : ’20. 3. ~ 7.

- 군 일상감사 및 전남도 계약심사 : 4. ~ 5.

- 사업수행능력평가(pq) 및 입찰업체 선정 : 6. 10. ~ 6. 30.

- 가격경쟁입찰(2차) 및 적격심사 : 7. 7. ~ 7. 22.

- 계약체결 : ’20. 7. 24.

· 계 약 자 : ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소 외 2

· 계약금액 : 931,680천원

□ 기본구상수립 용역보고회 : ’20. 8. 7.

□ 향후계획

□ 기본 및 실시설계 용역 추진 : ’20. 8. ~ ’21. 7.

- 도시관리계획결정, 유원지 조성계획수립, 환경성·재해영향성 등 검토,

실시설계 등

□ 착수보고회(기본구상 용역안 공유 및 의견수렴) : ’20. 9.

□ 주민설명회 : ’20. 9.

□ 기존 건축물 철거공사 : ’20. 10. ~ ’20. 12.

□ 공사발주 및 사업추진 : ’21. 7. ~ ’22. 12.

□ 관련사업 연계협업 추진

- 침실습지복원사업(환경과), 동화정원(관광과), 신활력플러스사업(농정과)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

곡성읍 복합문화센터 건립

(생활 SOC 복합화사업)

담당자

문화체육과 오미진(☎360-8353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2019 생활SOC 복합화 사업으로 공모 선정되어 지역주민들의 여가 생활       공간과 문화생활을 체감할 수 있는 복합시설물 건립으로 행복지수 증대

○ 시가지 활성화를 도모하고, 주민 자율형 복합문화예술 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 곡성군 곡성읍 읍내리 128번지외 1

○ 규 모 : 부지면적 5,889㎡, 건물연면적 1,400㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,500			1,160	2,340
국 도 비	1,950			150	300
시군구비	1,550			510	1040

□ 추진상황

○ 국가균형발전위원회 “생활 SOC 복합화” 사업으로 공모 선정 : ‘19. 10.

○ 직업체험관과 연계 운영을 위한 위치변경 검토 : ‘20. 2.

○ 문화체육관광부 위치변경 승인요청 :‘20. 2. 28.

○ 문체부 공공도서관 건립 사업 컨설팅 대상 선정 : ‘20. 4.

○ 위치변경에 따른 도 지방재정투자 심사(재심사) 자료 제출 : ‘20. 4. 8.

□ 향후계획

○ 공공건축 사업계획 사전검토 : ‘20. 5.

○ 통합설계 용역 추진 계획 수립: ‘20. 6.

○ 통합설계 용역 발주에 따른 계약심사, 일상감사 요구: ‘20. 6.

○ 기본설계 및 실시설계 용역 : ‘20. 6. ~ 9.

○ 행정절차(건설기술심의, 도계약심사, 일상감사) 이행 :‘20. 10.~ 12.

○ 공사 착공 및 완공 :‘21. 1. ~ ‘22. 7.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도림사 관광지 활성화 사업

담당자

관광과 지창용(☎360-8289)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도림사 관광지의 관광환경 변화와 이용객의 요구에 부응하는 매력점을   구축하여 사계절 가족휴양 관광지로 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3년)

○ 위 치 : 곡성군 곡성읍 월봉리, 구원리 일원(도림사 관광지)

○ 규 모 : 도림사 관광지 정비 A=242,550㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	-	-	550	4,450
국 비
시 도 비	2,500	-	-	275	2,225
시군구비	2,500	-	-	275	2,225
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업 실시설계 및 디자인설계(1단계) 용역 발주 : 2020. 3.

□ 향후계획

○ 사업 실시 및 디자인설계(1단계) 용역 및 사업 추진 : 2020. 4. ~ 2021. 12.

○ 사업 실시 및 디자인설계(2단계) 용역 및 사업 추진 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

곡성 보성강변 경관자원화 사업

담당자

관광과 김형규(☎360-8445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국도18호선 유휴공간을 활용하여 소공원, 조경 및 편의시설, 야간경관 등을 설치함으로써 천혜의 자연환경과 함께 양호한 수변경관을 조성하여 특화된 선형관광지로 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3년)

○ 위 치 : 석곡면 덕흥리 ~ 오곡면 압록리(국도18호선 일원)

○ 규 모 : 특색있는 테마길 조성 L=15㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,500	-	-	300	4,200
국 비
시 도 비	2,250	-	-	150	2,100
시군구비	2,250	-	-	150	2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6.7%)

○ 사업 실시설계 및 디자인설계(1단계) 용역 발주 : 2020. 3.

□ 향후계획

○ 사업 실시 및 디자인설계(1단계) 용역 및 사업 추진 : 2020. 4. ~ 2021. 12.

○ 사업 실시 및 디자인설계(2단계) 용역 및 사업 추진 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

섬진강변 증기기관차 정차역별 특화개발사업

담당자

관광과 김영중(☎360-8308)

□ 사업목적 및 필요성

○ 증기기관차 정차역별 특색 있는 개발로 섬진강 기차마을에서 섬진강을

따라 압록유원지까지 아우르는 관광인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022 (3년)

○ 위 치 : 곡성 섬진강 기차마을 ~ 압록역 일원

○ 규 모 : 정차역별 특화개발 6개소(기차마을, 침곡역, 송정역, 가정역, 이정역, 압록역)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	-	-	550	4,450
국 비
시 도 비	2,500	-	-	275	2,225
시군구비	2,500	-	-	275	2,225
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업 실시설계 및 디자인설계(1단계) 용역 발주 : 2020. 3.

○ 증기기관차 운행선로 다짐 보강공사 완료      : 2020. 3. ~ 4.

□ 향후계획

○ 사업 실시 및 디자인설계(1단계) 용역 및 사업 추진 : 2020. 4. ~ 2021. 12.

○ 사업 실시 및 디자인설계(2단계) 용역 및 사업 추진 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

군도6호선 개설공사(매월리)

담당자

안전건설과 장태훈(☎360-8487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안전하고 쾌적한 교통인프라 제공으로 주민 정주여건 개선과 교통 편의

제공, 물류, 교통비 절감 등 지역 경제활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.10. 10. ~ 2020. 10. 8.

○ 위 치 : 입면 매월리 일원

○ 규 모 : 도로정비 L=1.5km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,600		1,449	1,151
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	-	1,449	1,151	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  75%)

○ 배수로 L=450m, 월평교 L=32m 설치 완료

○ 도로 성토 및 월명교 공사 추진 중

□ 향후계획

○ 배수로, 도로 포장 공사 추진, 2020. 10. 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음.